『군산시 해양수산 복합공간 신축공사』 설계용역 과업지시서

2018.  5.

〓 목    차 〓

제1장 과업개요	3

1. 과업의 명칭	3

2. 과업의 목적	3

3. 용역의 개요	3

4. 용역의 범위	5

5. 용역 일반사항	5

제2장 설계 기본지침	8

1. 목적	8

2. 일반사항	8

3. 공공건축물 에너지 절약검토 추진 등	9

제3장 기본설계	8

1. 기본설계의 범위	8

2. 기본설계 도서작성	8

3. 기본계획 작성시 검토사항	9

제4장 실시설계	12

1. 실시설계의 범위	12

2. 설계도서 작성기준	10

3. 설계설명서	13

4. 시방서	14

5. 설계도면	15

6. 설계내역서	13

7. 성과품 제출	14

8. 기타	15

제5장 관련서식	15

1. 보안각서	16

2. 책임기술자 선임계	17

3. 주간공정보고	18

4. 건축설계에서의 도서작성	19

제 1 장   과  업  개  요

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 군산시 해양수산 복합공간 신축공사 설계용역 이라 한다.

2. 과업의 목적

군산시 해양수산 복합공간 신축을 통해 수산물 생산, 판매, 유통, 업무지원 등이 가능한 공간을 확보함으로써 동백대교 건설 및 해망동 주변 환경 정비에 대응하여 주변 관광자원과 연계한 수산물 판매 촉진을 통해 지역 경제 활성화에 기여하기 위함

3. 용역의 개요

가. 과업규모

◦ 위    치 : 군산시 해망동 1011-22 일원

◦ 부지면적 : 약 11,412㎡(1011-22, 1011-21, 57-5, 57-4)

◦ 구    조 : 철근철골콘크리트조 (발주청과 상호협의 하여 결정 할 수 있음)

◦ 연 면 적 :  5,530㎡ 정도(±5% 이내 조정가능)

◦ 용    도 : 판매시설(수산물종합센터)

◦ 예정공사비: 11,200백만원 (부가세 포함)

- 제시된 금액은 건축·기계·전기·통신·소방·토목·조경 및 철거, 폐기물처리등에 대한 총공사비이며, 전기·가스·수도 등 기반시설의 인입 필요여부를 검토하여 이를 위한 시설분담금은 예산액에 포함되도록 설계하여야 한다.

나. 과업수행기간 : 착수일로부터 210일(※ 발주청의 사정에 의해 변경가능)

◦기본설계 :  100일(※ 발주청의 사정에 의해 변경가능)

- 군산시 주택행정과 및 해양수산과 의견사항(주민설명회 의견포함) 및 경관심의 사항 등 반영하여 기본설계 실시

◦실시설계 :  110일(※ 발주청의 사정에 의해 변경가능)

다. 과업의 내용

◦ 기본설계▪실시설계, 녹색건축물 등 1식

◦ 관련법령 준수 및 과업지시서에서 정하는 사항

라. 배치계획

구 분	용 도	비 고
주 건 물	해양수산 복합공간
주차시설	법정대수 이상 최대한 수용할 수 있는 공간으로 설계
조경,진입로(차로,인도), 주․부 출입구등	조경, 게시판, 진입로, 출입구 등 부수시설을 실정에 맞게 설계

◦ 층별 용도(안)

구 분	실 별 용 도
계	5,530㎡
지상1층	집배송장, 도·소매 직판장, 주차장 등
지상2층	수산물식당, 휴게실, 수산물홍보관, 사무실 등
지상3층	HACCP 인증 전처리시설, 냉장저장고, 소포장작업실, 수산물건조장 등
기타 사항	기타 해양수산 복합공간 시설물

※ 용도, 면적, 기타사항의 변경은 주택행정과 및 해양수산과와 협의하여 조정한다.

4. 용역의 범위

가. 본 과업은 군산시(이하 “발주청”이라 한다)와 계약상대자(이하“수급인”이라 한다)가 체결한 용역계약서 및 본 과업에 의한 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 관련조사, 건축협의에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등, 계약문서에 의해 요구되는 일체의 사항을 포함한다.

나. 군산시 수산물종합센터 신축에 필요한 건축, 토목, 기계설비, 조경, 오수처리, 전기, 통신, 소방, 철거, 폐기물 등의 기본 사항을 현지 조사하여 지질조사서, 배치도, 평면도, 공사비, 공사기간 등의 기본적인 내용을 작성 제출 후 승인을 득한 후 구체화 하여 공사시행에 필요한 설계 도서를 작성업무

다. 각종 인허가 처리지원업무 및 자문, 심의, 심사 대응업무

라. 각종 인증관련 업무 - 녹색건축물인증(일반등급 이상), 에너지효율(1등급), 에너지절약계획서, 장애물없는생활환경인증(일반등급 이상) 등 각종 인증  관련 설계도서 작성 및 인증업무(설계단계의 예비인증 등 / 수수료 포함)

5. 용역 일반사항

가. 군산시 해양수산 복합공간 신축 관련부서(주택행정과, 해양수산과)협의하여야 한다.

나. 예정공사비는 최적의 공법 및 가장 경제적 공사비가 산출될 수 있도록 하여야 하고  112억원의 범위(부가가치세 포함)내에서 설계한다.

(단, 설계과정에서 심의회, 보고회 등에서 결정․ 보완 또는 지시된 사항을 설계에

반영할 경우 공사비 내용을 증․감할 수 있다)

다. 과업기간은 착수일로부터 210일간이며 용역 수행 중 천재지변이나, 우리시의 계획 변경 등으로 기간 내 과업완수가 불가능하다고 판단 시 그 기간을 연장할 수 있다.

라. 업무수행

(1) 관련 부서와의 협의 충실

본 과업과 관련된 부서와 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토 반영하여야 한다.             (특히 사무실배치 등에 대하여는 사전협의 하여야 한다)

(2) 설계자료 조사 성실

성실하게 자료를 조사하기 위하여 발주처의 요구가 있을 경우 잘된 타지역 수산물종합센터 3개소이상을 우리시 관련부서와 같이 조사하고 수산물 종합센터 상인회의 공청회를 통한 의견을 반영하여 기본설계에 적용 등 벤치마킹 하여야 하며, 실시설계를 진행함에 있어 충분한 자료수집으로 질적 향상은 물론 안전하고 경제적 시설이 되도록 노력해야 한다.

(조사 수집된 자료 및 재료선택 등은 사전에 우리시와 협의해야한다)

※ 군산지방해양수산청의 부지사용 조건 사항을 사전에 이행하여 설계 시 반영추진

(3) 회의참석 등

용역 건축사는 본 과업과 관련된 각종 심의회, 보고회에 참석하여 설명하고,

분야별 기술사항에 대하여 책임 기술자로 하여금 질의에 답변토록 하여야 한다.

(4) 자료제출 성실

과업 수행 중 과업 수행 후 각종 자문회의, 심의회, 보고회 등을 위하여 자료

제출 요구가 있을시 이에 응하여 자료를 제출하여야 한다.

(5) 용역 착수시 제출 서류

착수계 접수시 아래와 같은 서류를 구비하여 제출하여야 한다.

(가) 예정공정표(세부 계획서)

(나) 참여기술자 현황(건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 토목)- (붙임1.붙임2)

각 분야별로 관계법규 규정에 적합한 기술 인력으로 구성하되 참여기술자

들은 해당 자격증사본(원본대조필) 또는 관계법규와 관련된 증빙서류 첨부

(다) 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업계획서

(라) 기타 용역수행에 필요한 사항

(6) 업무협의 및 공정보고

(가) 계약자는 착수계 제출 후 7일이내 과업수행계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

(나) 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 하여야 한다.

○ 조사 및 자료수집 완료시          ○ 기본계획 완료시

○ 실시계획 완료시(납품전)           ○ 성과품(납품전)

(다) 과업 수행사항에 대하여 E-메일로 보고(매주 금요일까지)하여 감독원 지시를 받아야 한다.(붙임3)

(7) 변경 및 정산

(가) 우리시가 본 과업의 일부 또는 전부를 중지 시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정할 때는 용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며 우리시의 방침을 따라야 한다.

(나) 시공 중 부득이한 설계변경(구조변경, 공법변경, 시공 불가능 발생, 설비 시공 불가능 등)이 수반될 경우 건축사는 대안 등 검토의견을 제출한다.

(다) 본 용역 과업비는 추정공사비에 의한 것이므로 설계 완료 후 공사금액이  감소될 경우 정산 감액 조치한다.

(8) 설계상의 하자의 책임

용역자가 설계의 잘못으로 공사 또는 공사 후에라도 다음과 같은 중대 하자

사항이 발생하였을 경우에는 민․형사상의 책임은 물론 손해를 배상하여야 한다.

(가) 구조 및 기능상 중요하자가 발생하였을 경우

(나) 기술상 중대한 결함으로 인해 경제적 손실 및 공사 진행에 지장이 초래 되었을 경우

(9) 손해배상공제 가입

(가) 건축사가 업무를 수행할 때 고의 또는 과실로 건축주에게 재산상의 손해를 입힌 경우에는 그 손해를 배상하기 위해 건축사법 제20조 규정에 따라 손해배상책임을 보장하기 위해 공제에 가입하여야 한다.

(나) 건축사는 계약체결 시 공제증서를 제출하여야 한다.

(10) 기 타

(가) 각종 관련법규에 의거 인․허가 및 심의를 득하여야 하고 제반 절차를(대행)

이행하여 이에 따른 보완사항이 있을시 보완하여 인허가등 승인을 득할 수 있도록

하여야 한다. (“예” 경관심의, 미관심의, 건축, 전기, 소방, 통신, 도로점용, 가스,

상․하수도, 오․배수, 가설건축 등)

(나) 본 과업지시서에 정하지 않았거나 누락된 부분에 대하여는 우리시와 협의하여 결정하고 기타 경미한 사항은 용역자 부담으로 하며 기타 발주청의 해석에 따른다.

(다) 감독원이 과업 수행중 하도급자나 연계고용인이 과업수행에 부적합하다고 인정될 때에는 즉시 교체 요구 할 수 있으며 용역자는 이에 응하여야 한다.

제 2 장  설 계  기 본 지 침

1. 목  적

군산시 해양수산 복합공간 신축공사에 필요한 한정된 예산 범위 내에서 기능적 요구 사항에 대한 최선의 해결책을 제시하고 진취적이고 창의적인 설계안을 구하기 위함.

2. 일반사항

1) 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 아니 되며 우리과에 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

2) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

3) 대지의 주변현황을 고려하여 안정성 있게 주변건물, 도로, 조경시설물, 지하매설물 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 반영하여야 한다.

5) 모든 시설은 장애인, 노인, 임산부 등이 다른 사람의 도움 없이 안전하고 편리하게 시설 및 설비를 이용할 수 있도록 설계하여야 한다.

6) 미래지향적이고 독창적인 설계를 지향하며 주변 환경을 최대한 고려한 배치로 설계하여야 한다.

7) 내·외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방한, 단열, 결로 등 에너지 절약형 구조로 설계하며, 전기 및 기계설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템으로 설계하며, 관리적인 측면을 고려한 시스템을 검토하여야 한다.

8) 특수한 자재 또는 공법을 사용하고자 하는 경우에는 그 사유와 성능. 경제성. 시공성. 유통구조 기타 필요한 사항을 발주청에 제시하여 신기술(신공법 등)에 대한 승인을 받아 설계에 반영하도록 한다.

9) 설계자는 사전조사(지반조사 포함)를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며, 사전조사 시 지하매설물과의 관계, 도로의 연결 관계, 지반상황, 우․오수관의 위치 등을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

10) 주차장은 진․출입에 지장이 없고, 보행자의 진․출입이 안전하도록 하여야 한다.

11) 유지관리비용이 최소화 되도록 경제적이고 화재, 지진 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리한 구조로 설계하며, 구조안정성이 확보된 설계를 하여야 한다.

12) 설계도서에는 특정제품의 사양을 명시하지 않고 설계에 요구되는 성능과 재질을 명시하여야 한다.

13) 녹색건축물 일반 등급 인증, 에너지효율 1등급 인증, 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 등 관계법령에 해당되는 인증을 받을 수 있도록 계획한다.

14) 기타 발주자 측이 요구한 사항을 반영하여야 한다.

3. 공공건축물 에너지 절약검토 추진 등

1) 신재생 에너지 의무 설치 설비에 대한 건축허가 신청전에 설치계획서 제출 - 에너지 관리공단 검토 승인

2) 녹색건축물 조성지원법 제14조 및 같은법 시행령 제10조, 같은법 시행규칙 제7조, 건축물의 에너지절약 설계기준에 적합하도록 에너지절약계획서를 작성하여 에너지 관련 전문기관(에너지관리공단, 한국시설안전공단 등)의 검토를 득한 후 제출하여야 한다.(설계도서에 반영 및 건축허가 시 제출)

3) 기타 인증은 검토 및 협의 후 인증을 득하여야 한다.

제 3 장   기 본 설 계

1. 기본설계의 범위

1) “기본설계”라 함은 기본계획 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계단계로서 우리시로부터 승인을 받는 단계를 말한다.

2) 우리시에서 기본 및 실시설계 기간 동안 보고회(주민, 관련부서 등)등을 개최할 경우에는 보고회 결과 요구된 사항에 대하여 우리시의 승인을 득한 후 설계에 반영하여야 하며, 기본설계용역 보고회시에는 필요한 일체의 자료를 준비하여야 한다.

- 기본설계(안)에 대하여 보고회 개최 시 채택된 설계안에 대하여 실시설계에 반영․수행한다.

2. 기본설계도서 작성

1) 계약자는 3가지 이상의 기본설계“안”을 제출하여 우리시가 선택할 수 있도록 하여야 한다.

2) 기본설계“안”에는 다음사항이 표기되어야 한다.

- 기본설계(1.2.3안) 설명자료, 위치도, 설계개요, 배치도(1.2.3안), 평면도(1.2.3안),

정면 입면도(1.2.3안), 기타 감독자 요구사항, 장단점 등

- 각 안별로 추정 개략공사비 산출 및 관계법규 분석을 포함한다.

3. 기본계획 작성시 검토사항

1) 관계법규 등 사전조사

- 설계용역자는 본 설계와 관련한 제반 법규에 적합하게 설계하여야 하며 면밀한 사전조사 후 설계에 반드시 반영하여야 한다.

가. 대지의 여건조사

(1) 지형조사

(2) 교통현황조사

(3) 도시계획 관련조사(토지이용현황, 주변개발계획)

(4) 하수도 및 오수관계 조사

(5) 상수도 인입 및 급수량 조사

(6) 지하 매설물 조사

(7) 도시가스 인입 조사

(8) 전기인입 및 용량조사

(9) 대지 내 및 대지 주변 구조물(시설물) 조사

나. 지반조사

(1) 지반조사 시 인근지역의 기존 지반조사 자료를 포함한 사전 개략조사를 통하여 지반특성을 예비적으로 평가, 지반조사 계획에 활용한다.

(2) 시추간격 및 조사 위치는 감독관 승인을 득하여 시행한다.

(3) 지반조사(보링) 수량의 경우 5공 이상으로 하며 증, 감이 필요할 경우 발주처와 협의하여야 한다.

(4) 시추심도 30m이상 및 시추공 2개소 이상에 대해 하향식 탄성파 탐사(다운홀 등)를 실시하고 구조물의 내진설계에 반영하여야 한다.

(5) 지반조사 보고서에는 표준관입시험, 탄성파 탐사결과, 지반조건(KBC 2016적용), 지하수위 측정 등이 명기되어야 한다.

(6) 시추심도는 풍화암 5m이상 혹은 연암 2m 이상, 계획 지하구조물 깊이 이상으로 한다.

(7) 시추조사 결과 지하구조물 계획에 영향을 줄 정도로 지반변동이 심하다고 판정될 경우 발주부서와 협의하여 추가 보링조사 및 탄성파 탐사를 실시하여야 한다.

(8) 시추공으로 인한 지하수의 오염물질 유입 등의 발생요인이 있을 경우에는 폐공 되메우기 등 조치를 하여야 한다.

(9) 흙막이 가시설이 필요할 경우 지반조사를 흙막이 외부에도 시행(검토)한다.

(10) 현장여건에 적합한 가시설 공법적용하여 설계할 것.

다. 현황측량

(1) 기준점 및 수준점은 공공측량의 작업규정에 의해 시행한다.

(2) 도근점 위치는 향후 공사 시 확인할 수 있는 위치에 설치하며 야장에 기록하여 훼손 시 복원될 수 있도록 하여야 한다.

라. 공사용 가설동력 및 통신현황 조사

마. 잔토처리 및 성토 시 반입 토취장 관계 확인 등

바. 공사중 교통처리계획도 수립, 보행동선 및 자전거도로 검토, 교통약자 배려 검토

2) 현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

3) 유사 사례 조사

4) 관계법령 조사

5) 관련 기관 또는 부서와의 협의

제 4 장   실  시  설  계

1. 실시설계의 범위

실시설계는 기본설계를 바탕으로 하여 입찰 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 붙임 4호 서식에 준하여 설계도서를 작성하며 우리시의 건축협의 등을 거쳐 최종 확정하여야 한다.

2. 설계도서 작성기준

가. 건축분야

(1) 건축법 및 관계 법령기준

(2) 기타 본 과업에 적용되어야 할 관련 기준 등

(3) 설계 용역자는 위 조사내용을 숙지하여 본 과업 내용이 적법하도록 하여야

하며 성과품 납품 시 또는 납품 후에라도 잘못된 사항이나 보완사항이 발견             되었을 때에는 이를 숙지하지 않은 책임이 설계 용역자에게 있으며 즉시               보완 수정 하여야 한다.

나. 토목분야

(1) 설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량에 관한 조사 후 경제성, 시공성, 수명 등을

고려, 두께를 결정 설계하여야 한다.

(2) 지질조사에 따라 흙막이 등 명확하게 상세 설계 시공되도록 하여야 한다.

다. 조경분야

(1) 토질의 성격과 주변 환경에 맞는 생산적이고 경제적인 향토수종을 선정, 조경의

토착화를 도모하며 가급적 울타리는 없도록 조경 등으로 대체하여야 한다.

(2) 구조물은 경관과 구조물간의 상호 유기적 연관성을 갖도록 한다.

라. 기계분야

(1) 각종 시설물은 유지관리가 용이하게 시공되도록 설계하여야 한다.

(2) 고효율에너지 기자재를 도입 반영하여 설계한다.

(3) 기계분야, 환경관계법령 및 기타 법령에 위배됨이 없이 설계한다.

마. 전기분야

(1) 전기공사업법 및 전기사업법 규정에 적합하게 설계한다.

(2) 설계기준은 전기설비기술기준, 내선규정, 전기관계법규 및 관련소방 법규를

준수 충족하여야 한다.

(3) 각 분야별, 분기회로별 총 부하 용량계산 및 냉․난방․공조․환기 등 설비부하             및 기타 전원(향후 증설) 등을 고려하여 동력전원 및 부하설비를 계산 설계한다.

바. 통신분야

(1) 국선 및 내선의 회선, 케이블 규격선정 및 인입선 고려설계

(2) 행정 전산망 구성 및 각종 정보 통신망 구축 및 최신의 첨단장비로 구성되는             데이터 통신설비 설계

(3) 향후 증설이 용이하도록 설계

사. 소방분야

(1) 소방법 등 관련법 규정에 적합하게 설계

(2) 자동화재 탐지설비 등 유지관리 및 소화활동에 맞는 시설 확보

아. 공통사항

(1) 천장 및 소방, 방송설비로 보강을 요할시 설계에 반영

(2) 각 설계도는 더 이상 세부설계가 필요 없도록 최대한 상세히 표현 되도록

완벽하게 설계하고 주요부분은 시공에 필요한 시공 상세도 작성

(3) 각 설계도서는 분야별로 구분 작성하되 건축사 책임아래 상호 긴밀한 협조체계로

각종 장비 등 설치에 필요한 층고, 천정고, 배치관계 등을 종합적으로 고려하여

분야별 시공시 설계상 하자가 발생하지 않도록 하여야 한다.

(4) 장애인의 이용에 지장이 없도록 관계규정에 적합하도록 설계하여야 한다.

(5) 주요 자재, 특허․신기술 공법, 장비 사용성 검토 등을 비교분석하여 사전에 우리시와 협의 지침확정 후 설계에 반영하여야 한다.

3. 설계 설명서

가. 설계 설명서는 본 과업의 전체를 순위를 정하여 아래와 같이 알아보기 쉽게 하여야 한다.

- 개요, 구조 및 면적, 부대시설, 공정표, 기타 필요한 시설

나. 설계 설명서에는 조건 적용 등 설계 특수사항을 표기하여야 한다.

다. 각 설명서는 공사별분야 이외의 사항도 표기하도록 하여야 한다.

라. 세부시설 설명서는 시설별로 현장 단위로 시설개요, 면적, 규모, 층고, 일반시설

내용 등 전반에 걸쳐 기술하고 그 실의 용도, 기능, 설치 목적 등을 표기하여

실제 사용자에게 시설물 이용에 편하도록 기준이 되는 근거와 안내가 되도록

작성한다.

4. 시방서

가. 일반시방서

건설공사 표준시방서에 기준하여 각 공종별로 상세하게 기술하여야 한다.

나. 특기시방서

(1) 주요자재에 대한 사항

(2) 공법에 관한 사항

(3) 기타 주의를 요하는 사항 등

5. 설계 도면

가. 건축 설계도서는 KSA0005 제도 통칙에 준하여 작성한다.

나. 과업 시설물의 설계도서는 공종별 발주, 구분별로 편철하여 목록표, 배치도,

구적도, 평면도, 단면도 등의 순으로 작성한다.

다. 도면 제작 중 중복이 있을 시는 단일화 할 수 있으며 동일 도면에 표시할 수 있다.

라. 도면 규격과 설계도 축적이 맞지 않을 경우에는 일부 축척을 변경할 수 있다.

마. 필요한 도서 등은 발주기관에서 요구할 수 있다.

6. 설계 내역서

가. 공사비 원가계산은 회계예규(원가계산에 의한 예정가격작성준칙) 공사원가 계산

방식에 의거 작성한다.

나. 공사비 적산은 군산시 건설공사 공통단가 및 정부 표준품셈, 정부발표 노임단가

등에 의거 산출하되 아래와 같이 사전조사 및 판단을 하여 적산하여야 한다.

(1) 재료 단가 조사

(가) 본 공사에 소요되는 모든 자재를 각 품목, 품질 및 규격별로 조사한다.

(나) 단가는 조달청에서 고시하는 자료를 우선 적용하고 이에 누락된 품목은 일반 시장조사를 하되 기획재정부에 등록한 기관(대한건설협회,한국물가협회,한국물가정보센터등)의 물가자료 책자등과 직접 시장조사 된 3개 이상의 견적 등에 의한다.

(다) 공사자재 및 자재단가 결정은 거래 실례가격에 기준 한다. 단, 재료 및 자재

단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의

운반비를 계상 할 수 있다.

(라) 사용자재는 국내 생산품 중 KS품목 및 최고품 사용을 원칙으로 한다.

(2) 수량산출

(가) 수량 산출은 공사비의 효율적인 운용을 기하도록 한다.

(나) 경제적이고 합리적인 공법을 채택하여 작성 산정한다

7. 성과품 제출(공통)

연번	설 계 도 서	규 격	수 량	비 고
1	설계도면	A4 (A3반책, 백도) A3 (A3평철, 백도)	각 5부 각 5부	각분야별로 작성
2	분야별 합본 (내역서, 설명서, 시방서, 계산서, 도면 등)	A4	각 3부
3	설계설명서	A4	각 5부
4	지질조사보고서	A4	5 부
5	전단파속도시험 보고서	A4	5 부
6	공사시방서	A4	각 5부
7	내역서 (내역서,일위대가표,수량산출조서,단가산출조서 등 )	A4	각 5부
8	구조계산서(해당시)	A4	각 5부
9	각종 설계계산서(해당시)	A4	각 5부
10	공사예정공정표	A3	5 부
11	조감도(투시도)	900 × 700(칼라, 액자)	1 점
12	공사판넬 (조감도+위치도+설계개요+배치도+평면도)	A2(A3 반책)	1부
13	건축협의용 도서 및 각종 신고 협의도서 (예:각종 도서, 에너지절약계획서 등)	세움터 적용	소요량
14	관급자재 발주용 설계도서		소요량
15	설계도서 일체 USB 또는 CD		2개

※ 납품완료후 원가심사 및 일상감사에서 변동사항이 있을시 변동분은 재납품하여야 합니다.

※ 우리시 필요시 전체분과 차수분으로 우리시와 수급인의 협의 후 위의 내용은 조정될 수 있다.

※ 상기 설계도서는 분야별[건축(토목, 기계, 조경 포함), 전기, 통신, 소방]으로 작성

8. 기   타

- 건축협의 관련서류를 작성하고 협의에 협조하여야 한다.

- 관계부서 협의 및 주민설명회, 경관심의 등으로 의견을 수렴하는 경우 그 결과를

검토하여 설계에 반영하여야 한다.

- 기타 과업지시서 및 계약조건에 없는 사항은 발주처의 지시에 따른다.

【붙임 1】

보 안 각 서

용  역  명 :

용역착수일 :

용역준공일 :

아래의 본인은 상기의 설계용역을 수행함에 있어 취득한 자료와 성과물을 유출(제공, 대여, 분실 등)할시 민∙형사상의 책임을 질 것을 각서로 제출합니다.

-- 아      래 --

성 명	공 종	주민등록번호	주 소	서 명	비 고

계 약 자                     .

상    호 : 00000 건축사 사무소

주    소 : 000000   0000000000

날    짜 :     년     월    일

대    표 :                (인)

군산시장 귀하

【 붙임 2 】

책 임 기 술 자 선 임 계

소        속 :

성        명 :

주        소 :

주민등록번호 :

기술면허종별 :

면 허  번 호 :

상기인을 000건립공사 설계용역의 (건축,기계,소방,전기,통신,토목,구조,조경) 책임기술자로 선임하여 제출하오니 승인하여 주시기 바라오며 (건축,기계,소방,전기,통신,토목,구조,조경) 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자는 책임을 질 것을 서약합니다.

붙임 : 경력증명서 1부.

계 약 자 :                   .

상    호 : 00000 건축사 사무소

주    소 : 000000   0000000000

날    짜 :     년     월    일

대     표 :                (인)

군산시장 귀하

【 붙임 3 】

주간공정보고

설계용역명:                                    보고자: 책임기술자         (인)

전 주 결 과		금 주 계 획
기간	내 용	기간	내용
	건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 공종별 작업내용을 작성할 것.
※주요보고 사항	1. 각종 회의사항 : 주요 안건 및 결론 2. 설계변경사항, 지반조사 등: 3. 주요 문제점 및 대책 :
공정율(%)	전체 % (예정 %/ 실시 %)

※ e-메일로 매주 금요일 감독원에게 보고 할 것

【 붙임 4 】 건축설계에서의 도서작성

① 계획설계의 도서내용

종 류		내 용
건축	공사비 개산서	재료․장비선정에 따른 개략 공사비
	법규검토	제반법규검토, 인허가절차 파악
		설계구상안
	건축계획서	설계개요
		배치계획
		평면계획
		입면계획
		단면계획
	건축 도면	배치도
		대지 종․횡단면도
		각층 평면도
		입면도(2면 이상)
		단면도(종․횡단면도)
	심의 도서	심의대상인 경우
구조	구조계획서	구조계획개요
기계	기계설비 계획서	건축주 요구사항의 수용여부와 설계방침의 확정
		기계설비 계획개요
전기	전기설비 계획서	해당 법규 검토
		설계방향 설정, 전기설비계획개요
토목	토목계획서	우․오수처리계획서와 상수계획서
조경	조경계획서	식재 계획도

② 중간설계의 도서내용

가. 건 축

종 류		내 용
일반사항	개략 시방서	공사용 시방서(초안)
	공사비 개산서	기본설계 적용기준에 따라 개략공사비를 산정, 작성
	건축 계획서	공사개요(위치, 대지면적등)
		건축물규모(건축면적,연면적,높이,층수등)
		건축물 용도별 면적, 주차장규모
	법규 검토서	관련사항에 따른 법규검토
도면	도면 목록표	공종 구분해서 분류 작성
	안내도	방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록
	구적도	대지면적에 대한 기술
	실내재료마감표	바닥, 벽, 천정 등 실내마감
	배치도	축척 및 방위, 건축선, 대지경계선 및 대지가 정하는 도로의 위치와 폭, 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지의 거리, 신청건물과 기존건물과의 관계, 대지의 고저차, 부대시설물과의 관계
	주차 계획도	법정 주차대수와 주차 확보대수의 대비표, 주차배치도 및 차량 동선도 차량진출입 관련위치 및 구조
		옥외 및 지하 주차장 도면
	각층 및 지붕 평면도	기둥‧벽‧창문 등의 위치 및 복도, 계단, 승강기 위치
		방화 구획 및 방화벽의 위치
	입면도(2면 이상)	주요내외벽, 중심선 또는 마감선 칫수, 외부마감재료
	단면도(종․횡단면도)	건축물 최고높이, 각층의 높이, 반자높이
		천정내 배관 공간, 계단등의 관계를 표현
	투시도	투시도 또는 조감도

종 류			내 용
상세 도	수직 동선 상세도	계단평면․단면상세도
	부분 상세도	지상층 외벽 평․입․단면도
		지하층 부분 단면상세도
기타	정화조	정화조 평면․단면도
		용량 계산서

나. 구 조

종 류		내 용
일반 사항	구조 계산서
	설계 설명서
도면	기초 일람표
	구조 평면도	기초에서 옥탑까지 작성
	기둥 일람표
	보 일람표
	슬래브 일람표
	옹벽 일람표
	계단배근 일람표
	주심도

다. 기 계

종 류		내 용
일반사항	설계 설명서	계획설계시의 내용을 발전 확정
	소방시설 계획서	건물종별, 규모별, 층별 소방시설 계획에 관한 종합적 서류
도면	도면 목록표
	소방 설비도	해당 소방관련 설비
	장비 배치도	기계실, 공조실등의 장비배치방안 계획
	계통도	공조배관설비 계통도
		DUCT설비 계통도
		위생설비 계통도
		소화 설비 계통도
	기준층 및 주요층 기구 평면도	소화 설비 평면도
	저수조 및 고가수조	저수조 및 고가수조의 설치기준을 표시
	도시가스 인입 확인	도시가스 인입지역에 한해서 조사, 확인
	기구 상세도	기구의 선정

라. 전 기

종 류		내 용
일반 사항	설계 설명서	계획설계시의 내용을 발전 확장
	소방시설 계획표	각종 설치시설에 대한 계획표
도면	도면 목록표
	계통도	전력 계통도
		소방 계통도
	평면도	소방 평면도
	상세도	조명기구의 선정

마. 토 목

종 류		내 용
일반사항	설계 설명서
도면	도면 목록표
	각종 평면도	주요시설물 계획
	대지 종․횡 단면도
	포장계획 평․단면도
	우․오수배수처리 평․종단면도
	상하수 계통도	우․오수배수처리 구조물 위치 및 상세도 공공하수도와의 연결방법, 상수도 인입계획, 정화조의 위치

바. 조경공사

종 류		내 용
일반 사항	설계 설명서
도면	도면 목록표
	조경 배치도	법정 면적과 계획면적의 대비, 조경계획 및 식재 상세도
	식재 평면도
	단면도

③ 실시설계의 도서내용

가. 건 축

종 류		축 적
일반 사항	공사 시방서
	설개 개요
	각 공종별 공사비 내역서
	각종 계산서
	심의에서 각종 인허가 관련자료
일반 도면	표지
	도면 목록표
	안내도
	구적도
	지적도
	면적 산출표
	대지 종․횡단면도
	배치도	1/100이상
	주차 계획도	1/100이상
	평면도	1/100이상
	입면도(2면 이상)	1/100이상
	단면도(종․횡단면도 등)	1/100이상
	실내벽 및 반자의 마감도	1/100이상

종 류			축 적
상세 도면	수직 동선 관련 상세도	코아 평면상세도	1/5～1/50
		계단 평․단면상세도	1/5～1/50
		승강기.샤프트 평․단면상세도	1/5～1/50
		주차 경사로 평․단면상세도	1/5～1/50
		주차 리프트 평․단면상세도	1/5～1/50

종 류			축 적
상세 도면	부분 상세도	주요부분 상세도	1/5～1/50
		발코니 상세도	1/5～1/50
		출입구 상세도	1/5～1/50
		지상층 외벽 입면․단면 상세도	1/5～1/100
	창호도	창호 일람표	1/5～1/50
		창호 평면도	1/5～1/50
기타	정화조	건축용 평․단면도	1/5～1/100
	특수분야 도면	소음․방진, 무대․조명, 주방, 음향, 전시, 미술장식품 등

나. 구 조

종 류		축 적
일반 사항	구조계산서 (법령에 의거 작성을 요하는 건축물)
	시방서
	설계 설명서
도면	도면 목록표
	구조 평면도	1/30～1/200
	구조 단면도	1/30～1/200
	기초일람표	1/30～1/100
	앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도	1/30～1/100
	기둥 일람표	1/30～1/100
	보 일람표	1/30～1/100
	슬래브 일람표	1/30～1/100
	옹벽 일람표	1/30～1/100
	계단배근 일람표	1/30～1/100
	잡배근 일람표	1/30～1/100
	주심도	1/30～1/200

종 류			축 적
상세 도	계단 및 코아 상세도	계단 상세도	1/30～1/50
		경사로 상세도	1/30～1/50
		코아 상세도	1/30～1/50
	접합 상세도	기둥접합 상세도	1/5～1/50
		보접합 상세도	1/5～1/50
		BRACE접합 상세도	1/5～1/50
		DECK PLATE 설치도	1/5～1/50
		STUD BOLT 설치도	1/5～1/50
		ANCHOR BOLT 상세도	1/5～1/50

다. 기 계

종 류		내 용	축 적
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비내역서	시방 및 도면에 따라 세부공사비를 산정하여 작성
	부하계산서	설계기준에 따라 세부 부하 계산
	설계설명서	설계과정에서 확정된 내용 정리
도면	도면목록표	도면목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비일람표	주요장비의 사항을 알아보기쉽도록 표기
	옥외배관 평면도	옥외에서의 급배수, 도시가스, 유틸리등의 인입, 인출과 관경 및 위치등을 표시	1/100이상
	각 설비계통도	각 설비별 계통 표시
	각 설비평면도	공조, 환기, 위생, 소화설비등에 대한 내용등을 표시	1/100이상

라. 전 기

종 류		내 용	축 적
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	각종부하 계산서	변압기용량, 부하, 조도, 발전기 용량
	설계 설명서
	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비 일람표	주요장비의 사양을 표기

도면	도면 목록표	도면목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	인입 배치도	전력 배치도	1/100이상
		통신 배치도	1/100이상
		소방 배치도	1/100이상
	계통도	전력간선 계통도
		소방계통도
	평면도	전기실 장비설치 평면도	1/100이상
		기계실 장비설치 평면도	1/100이상
		전력 설비 평면도	1/100이상
		조명 설비 평면도	1/100이상
		통신 설비 평면도	1/100이상
		방범 설비 평면도	1/100이상
		소방 설비 평면도	1/100이상
		방송 설비 평면도	1/100이상

마. 토 목

종 류		내 용	축 적
일반 사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비내역서	시방 및 도면에 따라 세부 공사비를 산정하여 작성
도면	주요 평면도		필요축적
	대지종․횡단면도		필요축적
	토공사평․단면도		1/5～1/100
	흙막이상세도	굴토깊이 10M 미만	1/5～1/50
	옹벽 평․단면 전개도		1/5～1/100
	옹벽상세도		1/5～1/100
	지하매설 구조물 현황

바. 조 경

종 류		내 용	축 적
일반사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	설계 설명서
도면	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	배치도	공사계획 및 시설물배치도	1/100이상
	평면도	배식 평면도 및 수량 집계	1/100이상
		포장계획 평면도	1/100이상
		시설물 평면도	1/100이상
	입면도	식재 입면도 및 플랜터 전개도	1/100이상