■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자		2025.8.27.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 전북특별자치도교육감
대지현황	대지위치 군산시 중앙로2가 145번지 외 7필지
	대지면적 15,882.1㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
해체건축물현황	건축면적 1,565.4㎡		구조 경량철골조 및 철골조		층수 지상 1층
					건축물 동수 부5동
	주용도 교육연구시설		최고높이 6m
					연면적 4,108.91㎡ 중 530.08㎡ 해체
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	• 산소를 불어낼 때 화재예방을 위한 디테일한 안전작업 계획 보완 필요 (예시 화재감시자 배치, 소화기 비치, 불티방지막 설치 등 • 산소를 불어낼 때 철골 자재 운반 시 유도줄 2EA 사용 및 유도수 2명 배치 운용 필요 • 도로측 CCTV 설치 계획도 첨부 검토 • 철골 철거 시 유도원 2명이상 배치로 수시로 상황 검토 필요 • 현장사무실, 현장창고 설치 부분 미표기 • 지붕 판넬 철거 시 박공 부분(하부) 추락 방지대 설치 필요 • 외부 비계 설치도 검토 요함(도로변) • 제9동 지붕판넬, 벽판넬 해체방법 제시 • 소음 및 진동 대책 수립 조정(p.112) • 작업장 내 및 인접 부위에 가공 고압선이 존재하므로 방호관 설치 및 이동식 크레인 작업 시 신호수 및 안전 유도원 배치 요망 • 크레인 작업 반경 재고려하여 안전하고 순조로운 공사가 되도록 할 것 • 트럭 사용 목적을 좀 더 구체적으로 작성 바람 • 판넬 중도리 해체 계획에 대해서 순차적으로 안전을 고려하여 상세하게 설명 바람 • 안전을 고려하여 해체 방법을 고려해보기 바람
심의결과	[ 0 ] 원안 의결 [ 0 ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]