■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자		2025.8.27.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 전북특별자치도교육감
대지현황	대지위치 군산시 경암동 636-51번지
	대지면적 33,251㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
해체건축물현황	건축면적 4,553.2㎡ 중 2,227㎡ 주3동(중간동) 1,008㎡ 주5동(후관동) 1,219㎡		구조 시멘트벽돌조 및 철근콘크리트조		층수 지상 2층
					건축물 동수 주3동, 주5동
	주용도 교육연구시설		최고높이 주3동 6.8m, 주5동 7.45m
					연면적 7,786.53㎡ 중 4,454㎡ 해체 주3동(중간동) 2,016㎡ 주5동(후관동) 2,438㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	• 조적조와 RC조의 구조 형식이 다르므로 특히 조적조의 해체순서 및 안전 대책의 보완이 필요함 • p.43의 백호(타이어 type)의 그림이 궤도형으로 수정되어야 함 • 연와조 건물에 관한 해체 공법 및 순서가 명확하지 않아 보완 요함 • 소음 및 비산에 철저한 계획이 필요(살수 분진 폐기물 반출 계획 등) • 해체순서 검토 • 부지정리 계획 명확히 제시 • 조적벽체 전도 방지 대책 수립 • 시멘트벽돌조 특성 상 횡력에 취약하므로 보강 조치 후 해체작업 진행 요망 • 소음 및 분진 대책 강화 • 잭서포트 보강 요망 • 부지정리는 꼭 계획서에 명기하기 바람 • 해체 순서에 대해 재검토 바람(번호와 함께 해체 방향을 같이 표기할 것) • 해체 시 발생되는 3kN/㎡와 6kN/㎡에 대한 계산 근거를 제시하고 잭서포트 설치 여부를 확인 바람 • 철근 배근에 대한 추정 근거를 제시 바람(현장조사 또는 다른 방법 제시)
심의결과	[ 0 ] 원안 의결 [ 0 ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]