■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자		2025.10.1.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) ㈜세아베스틸
대지현황	대지위치 군산시 소룡동 3-7번지 외 1필지 (소룡동 2-1)
	대지면적 13,298.7㎡		용도지역(지구,구역) 전용공업지역
해체건축물현황	건축면적 1,087.75㎡		구조 철근콘크리트조 및 경량철골조		층수 지상 1층
					건축물 동수 1개동
	주용도 교육연구시설		최고높이 7.79m
					연면적 1,087.75㎡ 중 610㎡ 해체
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	• 철골트러스 해체 시 유도로프 2줄 설치 및 유도원 2명 이상 배치 계획을 도면에 반영 필요 • 철골 트러스 2줄걸이 위치 재조정(1/3지점) 및 줄걸이 각도 60도이하 도면에 반영 필요 • 특수구조 건축물의 트러스 철거 시 안전에 유의 시공(전도 인양줄 끊어짐) • CCTV가 기존 건물에 1EA가 설치 될 경우 사각지대가 발생하여 후면 쪽에 1EA가 추가 설치 요망 • 크레인 아웃트리거 발판 규격 상이 재검토 • CCTV 설치 개수 추가(사각 방지) • 살수 위치 표기 • 트러스 줄걸이 시 전도의 위험이 없도록 각도를 좁혀서 실시 할 것 • 특수구조물에 대한 구조검토를 구조기술사의 협력을 받아 재검토하기 바람 • 인양 하중에 대한 계산을 실시한 대로 크레인 관련 모든(줄걸이, 슬링 등) 부분에 동일하게 적용 바람
심의결과	[ ] 원안 의결 [ 0 ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]