군산시 하수관거 정비(BTL) 하자보수진행 상황

○ 정화조 폐쇄 확인 대상 정화조 5,049개소를 4개팀이 옥서면 외성산 2

길 33, 임피면 임피 1길 27, 나운동 상신3길 7, 대야면 석화로 3 인근

에서 조사하여 총 259개소 확인결과 226개소는 정상시공 되었으며 7개소

에서 부적정 시공이 발견되었고, 가옥주를 만나지 못해 재조사를 하여야

하는 세대가 26개소로 조사되어 금일까지 총 1,082개소의 조사가 완료

되었습니다.

○ 관거 하자 보수는 대야면 소재 ㈜창진에서 2개팀(준설팀, 보수팀)이

하자 보수 대상 1,228개소 중 대야면 우덕길 36 인근에서 관거 보수

13개소를 완료하여 총 587개소의 하자 보수를 완료하였습니다.

○ 맨홀 및 안전 사다리 보수는 ㈜창진, 한국화이바에서 하자 보수 대상

2,704개소 중 임피면 술산길 40 인근에서 맨홀 하자 보수 작업을 실시하여      맨홀보수 35개소, 문화동 하신재길 19 인근에서 안전 사다리 보수 45개소의      하자 보수를 완료하여 총 473개소의 하자보수를 완료하였습니다.

○ 금일 하자 보수 작업은 정화조 폐쇄 확인은 옥서면 옥봉 초교길 9-28,         대야면 만자로 4, 나운동 하신 3길 12, 임피면 임피2길 50, 관거보수는

업체사정상 진행되지 않으며, 맨홀 보수는 나운동 한밭 3길 9

안전 사다리 보수는 임피면 호원대 3길 64 인근에서 이루어질 예정입

니다.

하수관거 BTL 하자보수 추진

13. 09. 06

❍ 정화조 하자 점검

- 총 개소 1,082완료 (정상 987개소  /  재시공 95개소)

조별	반 원	조사지역	조사 완료 누계	전일 조사 완료	조사 개소	조사결과			재방문	비고
						계	정상	재시공
			1,082	849	259	233	226	7	26
1조	이삼규 이정혁	옥서면 외성산2실 33	362	274	89	88	86	2	1
2조	이기철 조재정	임피면 임피1길 27	265	223	42	42	42
3조	채병헌 박주철	대야면 석화로 3	207	154	56	53	52	1	3
4조	유연태 박경우	나운동 상신3길 7	248	198	72	50	46	4	22

❍ 도로포장조사

조사반원	조사지역	조사대상 개 소 수	누계	전일까지 조사량	금일조사량	비고
민원인,시민단체 채병헌	대야분구	5,049	4,199	4,199

❍ 하수관로 하자보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 조 운 일	대야면 우덕 3길	1,228	587	574	13

❍ 맨홀(안전사다리) 하자 보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 이 해 국	임피면 술산길 40	2,704	473	393	80
한국화이바 김 대 호	문화동 하신재길 19