군산시 하수관거 정비(BTL) 하자보수진행 상황

○ 정화조 폐쇄 확인 대상 정화조 5,049개소를 4개팀이 옥서면 외성산       2길 33, 임피면 동군산로 727, 대야면 번영로 900, 문화동 문화안길     24인근에서 조사하여 총 351개소 확인결과 285개소는 정상시공 되었으며     21개소에서 부적정 시공이 발견되었고, 가옥주를 만나지 못해 재조사를      하여야하는 세대가 45개소로 조사되어 금일까지 총 1,657개소의 조사가     완료 되었습니다.

○ 관거 하자 보수는 대야면 소재 ㈜창진에서 2개팀(준설팀, 보수팀)이

하자 보수 대상 1,228개소 중 회현면 회현로 182인근에서 관거 토사

준설  13개소를 완료하여 총 609개소의 하자 보수를 완료하였습니다.

○ 맨홀 및 안전 사다리 보수는 ㈜창진, 한국화이바에서 하자 보수 대상

2,704개소 중 나운동 나운로 4  인근에서 맨홀 하자 보수 작업을

실시하여 맨홀보수 22개소, 문화동 월명로 302인근에서 안전 사다리

보수 15개소의 하자 보수를 완료하여 총 543개소의 하자보수를

완료하였습니다.

○ 금일 하자 보수 작업은 정화조 폐쇄 확인은 옥서면 외성산 2길 33, 임피면

봉황길 38, 문화동 동래3길 31, 대야면 만자1길 20, 일원에서 이루어지며,

관거보수, 맨홀보수, 안전 사다리 보수는 일기로 인하여 진행되지

않습니다.

하수관거 BTL 하자보수 추진

13. 09. 10

❍ 정화조 하자 점검

- 총 개소 1,657완료 (정상 1,527개소  /  재시공 130개소)

조별	반 원	조사지역	조사 완료 누계	전일 조사 완료	조사 개소	조사결과			재방문	비고
						계	정상	재시공
			1,657	1,351	351	306	285	21	45
1조	이삼규 이정혁	옥서면 외성산2실 33	542	447	96	95	94	1	1
2조	이기철 조재정	임피면 동군산로 727	390	324	67	66	63	3	1
3조	채병헌 박주철	대야면 번영로 900	288	241	54	47	45	2	7
4조	유연태 박경우	문화동 문화안길 24	437	339	134	98	83	15	36

❍ 도로포장조사

조사반원	조사지역	조사대상 개 소 수	누계	전일까지 조사량	금일조사량	고
민원인,시민단체 채병헌	대야분구	5,049	4,199	4,199

❍ 하수관로 하자보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 조 운 일	회현면 회현로 181	1,228	609	596	13

❍ 맨홀(안전사다리) 하자 보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 이 해 국	나운동 나운로 4	2,704	543	506	37
한국화이바 김 대 호	문화동 월명로 302