군산시 하수관거 정비(BTL) 하자보수진행 상황

○ 정화조 폐쇄 확인 대상 정화조 5,049개소를 4개팀이 옥서면 외성산       2길 33, 임피면 동군산로 727, 대야면 만자1길 20, 문화동 동래3길 21     인근에서 조사하여 총 198개소 확인결과 178개소는 정상시공 되었으며        5개소에서 부적정 시공이 발견되었고, 가옥주를 만나지 못해 재조사를      하여야하는 세대가 15개소로 조사되어 금일까지 총 1,840개소의 조사가    완료 되었습니다.

○ 관거 하자 보수는 대야면 소재 ㈜창진에서 2개팀(준설팀, 보수팀)이

하자 보수 대상 1,228개소 중 회현면 회현로 181인근에서 관거 보수

및 토사준설  15개소를 완료하여 총 624개소의 하자 보수를 완료하였습니다.

○ 맨홀 및 안전 사다리 보수는 ㈜창진에서 하자 보수 대상 2,704개소 중

나운동 나운로 4  인근에서 맨홀 하자 보수 작업하여 실시하여 맨홀        보수 22개소의 하자 보수를 완료하여 총 565개소의 하자 보수를

완료하였습니다.

○ 금일 하자 보수 작업은 정화조 폐쇄 확인은 회현초교 2길 28-5, 임피면

서원서곡로 592, 문화동 동래3길 31, 대야면 만자3길 24, 일원에서 이루어

지며, 관거 보수는 서수면 항쟁로 193, 맨홀보수는 나운동 대학로 268

안전사다리 보수는 문화동 나운로 4 인근에서 진행됩니다.

하수관거 BTL 하자보수 추진

13. 09. 11

❍ 정화조 하자 점검

- 총 개소 1,840완료 (정상 1,705개소  /  재시공 135개소)

조별	반 원	조사지역	조사 완료 누계	전일 조사 완료	조사 개소	조사결과			재방문	비고
						계	정상	재시공
			1,840	1,657	198	183	178	5	15
1조	이삼규 이정혁	옥서면 외성산2실 33	591	542	50	49	49	0	1
2조	이기철 조재정	임피면 동군산로 727	441	390	52	51	51	0	1
3조	채병헌 박주철	대야면 만자1길 20	339	288	54	51	48	3	3
4조	유연태 박경우	문화동 동래3길 21	469	437	42	32	30	2	10

❍ 도로포장조사

조사반원	조사지역	조사대상 개 소 수	누계	전일까지 조사량	금일조사량	고
민원인,시민단체 채병헌	대야분구	5,049	4,199	4,199

❍ 하수관로 하자보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 조 운 일	회현면 회현로 181	1,228	624	609	15

❍ 맨홀(안전사다리) 하자 보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 이 해 국	나운동 나운로 4	2,704	565	543	22
한국화이바 김 대 호	문화동 월명로 302