군산시 하수관거 정비(BTL) 하자보수진행 상황

○ 정화조 폐쇄 확인 대상 정화조 5,049개소를 3개팀이 옥서면 선연길

76, 옥구읍 옥구로 38, 대야면 만자2길 2, 수송동 진포1길 56인근

에서 조사하여 총 290개소 확인결과 210개소는 정상시공 되었으며 8개소

에서 부적정 시공이 발견되었고, 가옥주를 만나지 못해 재조사를 하여야

하는 세대가 72개소로 조사되어 금일까지 총 2,529개소의 조사가 완료

되었습니다.

○ 도로 포장 복구 조사는 시민단체와 함께 임피면 임피면 중전길 46

인근에서 35개소를 조사하여 총 5,049개소중 4,340개소의 조사를 완료

했습니다.

○ 관거 하자 보수는 대야면 소재 ㈜창진에서 2개팀(준설팀, 보수팀)이

하자 보수 대상 1,228개소 중 수송동 월명로 302에서 관거 보수

및 토사준설  14개소를 완료하여 총 712개소의 하자 보수를 완료하였습니다.

○ 맨홀 및 안전 사다리 보수는 ㈜창진에서 하자 보수 대상 2,704개소 중

나운동 대학로 346 인근에서 맨홀 하자 보수 작업하여 실시하여 맨홀보수

9개소의 하자 보수를 완료하여 총 631개소의 하자 보수를 완료하였

습니다.

○ 금일 하자 보수 작업은 정화조 폐쇄 확인은 추석 명절 대비 시설물 점검

으로 진행되지 않습니다. 포장조사는 임피면 상주길 10, 관거 보수는

수송동 동메3길 35인근 맨홀보수는나운동 한밭 2길 10인근에서 진행

됩니다.

하수관거 BTL 하자보수 추진

13. 09. 16

❍ 정화조 하자 점검

- 총 개소 2,529완료 (정상 2,366개소  /  재시공 163개소)

조별	반 원	조사지역	조사 완료 누계	전일 조사 완료	조사 개소	조사결과			재방문	비고
						계	정상	재시공
			2,529	2,311	290	218	210	8	72
1조	이삼규 이정혁	옥서면 선연길 76	815	742	76	73	68	5	3
2조	이기철 조재정	옥구읍 옥구로 38	516	483	34	33	33	0	1
3조	채병헌 박주철	대야면 만자2길 2	491	439	55	52	51	1	3
4조	유연태 박경우	수송동 진포1길 58	707	647	125	60	58	2	65

❍ 도로포장조사

조사반원	조사지역	조사대상 개 소 수	누계	전일까지 조사량	금일조사량	비고
민원인,시민단체 채병헌	임피면 중전길 46	5,049	4,340	4,305	35

❍ 하수관로 하자보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 조 운 일	나운동 대학로 346	1,228	712	698	14

❍ 맨홀(안전사다리) 하자 보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 이 해 국 (맨홀보수)	나운동 대학로 346	2,704	631	622	9
한국화이바 김 대 호 (안전사다리)	작업없음

하수관거 정비 BTL 사업 어떻게 하고있나

▢ 그동안 논란이 되어왔던 하수관거 정비 BTL 사업에 대한 검증  용역이 지난 8월 23일 착공되어 현재 순조롭게 진행중에 있습니다.

군산시에서는 그동안 하수관거 정비사업에 대한 여러 가지 의혹들에 대한 진위를 가리기 위하여 위 사업에 대한 검증용역을 조달청에 발주의뢰한 결과 서울 소재 동명기술공사(주)가 사업시행자로 선정됨에 따라 지난달에 사업을 착수하여 현재 검증용역을 추진중에 있습니다.

검증용역은 금년 말 까지 완료를 목표로 하수관거시공 연장은 물론  정화조와 배수설비. 오수맨홀등 사업전반에 대한 물량과 공사비 차액 등을 정밀조사 하여  확정하고 현재 시공된 상태와 일치하는 하수도   도면을 재작성하여 준공당시의 사업량과 사업비등과 대조하여 그동안의 의혹들을 명확하게 밝힐 계획이며,

검증용역이 완료되면 시민단체와 관계전문가 시의회의원 사업시행자. 용역수행자 시관계공무원등 약 20여명으로 검증반을 구성하여 용역에 대한 확인검증을 실시하도록 하여 공정성과 신뢰성을 확보할 계획입니다.

또한 검증용역 결과에 따라 공사비를 재 산정 하여 준공당시 과다하게 정산된 부분이 있다면 금후 사업시행자측에 지급할 공사비를 삭감하여  시 재정이 낭비되는 일이 없도록 할 방침입니다.

▢ 이와 더불어 지금까지 드러난 하수관거 파손이나 정화조처리. 맨홀 사다리 미설치등에 대한 하자보수 공사도 현재 약 60%정도의 공정을 보이는등 신속하게 진행되고 있으며, 군산시에서는 하자보수 완료된 곳에 대한 확인검사를 실시하여 미흡한 부분에 대해서는 재시공 조치와 새로운 하자가 발생여부도 조사하고 있으며, 금년 11월까지는 하자 보수공사를 모두 완료할 계획입니다.

▢ 하수관거 정비 사업이란 빗물과 생활하수를 함께 처리하던 기존의 합류식 하수처리 방식을 빗물과 생활하수를 분리해서 처리하는 방식인 분류식으로 바꾸는 사업입니다.

분류식 처리 방법은 빗물을 제외한 생활하수만을 하수 처리장에서 처리하기 때문에 하수 처리량이 감소되고 처리장의 효율이 높아짐은 물론 수질개선효과가 높기 때문에 시민들이 부담하는 하수도 사용료의 절감시키고 수질환경을 보호하는 사업입니다.

이러한 장점 때문에 분류식 하수관거 사업은 국가정책 사업으로 군산시 뿐만 아니라 전국 모든 시.군에서 시행하고 있습니다.

하수관거 정비사업은 일시에 수백억원 이상의 많은 예산이 필요하나 정부나 지자체가 재원(국비 70%. 지방비 30%)을 마련하기가 어렵기 때문에 민간투자 사업 방식인 BTL 사업 방식으로 추진하였습니다.

BTL 사업이란 국가발전과 국민 생활의 편익을 위해 학교, 군부대, 상‧하수도등의 건설이 시급히 필요함에도, 정부의 재정형편이 어렵기 때문에 우선 민간사업자에게 민간 자본으로 시설의 건설과 일정기간 (20년)동안 시설을 운영토록 하고 정부가 시설투자비와 운영비를 년차적으로 지급하는 방식입니다.

▢ 하수관거 정비 BTL 사업은 고도의 전문성이 요구되기 때문에 환경부 산하 전문기관인 환경관리공단에 위탁하여 사업을 시행하였으며, 사업시행자와 시공사 하도급업자 선정은 물론 사업비 산정과 시설운영비 산정등도 환경관리공단에서 결정하였습니다.

하수관거 정비 BTL 사업은 총사업비 708억원을 투자하여 2008년 1월에 착공하여 2011년 6월 준공하였으며 현재 전문 운영사인 하이엔텍에서 2031년 6월까지 20년동안 관리 운영하도록 되어 있습니다.

우리시와 사업시행자간에 체결한 실시 협약에 따라 운영기간인 20년 동안에(2031년 6월까지) 발생하는 모든 하자는 사업시행자가 부담하여 보수하여야 하며 관리 운영 기간 만료 1년전(2030년 6월)에는 우리시와 사업시행자가 합동으로 하수관거 시설 전체를 점검하고 보수를 완료한후 우리시에 시설물을 인계하도록 되어있기 때문에 하자 보수로 인해 우리시가 재정을 부담하는 일은 없습니다.

▢ 현재 추진하고 있는 하자보수 공사 추진상황은 우리시 홈페이지 시민마당 “나도한마디” 란에 매일 게재하여 시민들에게 투명하게 공개하고 있으며, 앞으로 하수관거 사업과 관련하여 생긴 하자와 사용상의 불편 사항이 있으면 담당부서인 군산시청 하수과 하수계획계(454-5463)나 운영관리회사인 하이엔텍(451-0615)으로 연락하면 즉시 현장 확인 후 보수 조치토록 하여 시민들이 불편을 최소화 하는데 최선을 다하겠습니다.