하수관거 BTL 하자보수 추진

13. 10. 22

❍ 정화조 하자 점검

- 총 개소 5,450완료 (정상 4,994개소  /  재시공 456개소)

조별	반 원	조사지역	조사 완료 누계	전일 조사 완료	조사결과			재방문	조사 개소	비고
					계	정상	재시공
			5,450	5,420	30	30	0	0	30
1조	이삼규 이정혁	조사없음	1,934	1,934	0	0	0	0	0
2조	이기철 조재정	조사없음	534	534	0	0	0	0	0
3조	채병헌 박주철	대야면 석화로 35	1,256	1,226	30	30	0	0	30
4조	유연태 박경우	조사없음	1,726	1,726	0	0	0	0	0

❍ 도로포장조사

조사반원	조사지역	조사대상 개 소 수	누계	전일까지 조사량	금일조사량	비고
민원인,시민단체 채병헌	임피면 동군산로 744	5,049	4,970	4,939	31

❍ 하수관로 하자보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 조 운 일	보수없음	1,228	830	830	0

❍ 맨홀(안전사다리) 하자 보수

보수업체	보수지역	보수대상 개 소 수	누계	전일까지 작업량	금일작업량	비고
㈜ 창진 이 해 국 (맨홀보수)	보수없음	2,704	967	950	17
한국화이바 김 대 호 (안전사다리)	서수면 항쟁로 일원