정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

▣ 등록번호 : 2024-18

① 정책사업명

새만금 수산식품 수출가공 종합단지 조성

② 추진배경

❍ (미래전략) 환황해권 경제중심인 새만금 지역의 수출주도형 식품단지의 최적지 입지기반으로 군산시의 새로운 미래 발전 전략계획 수립

※ (’19년) 군산시 수산업 및 식품산업 2030발전계획

(’20년) 새만금수산식품클러스터 기본계획

❍ (숙원사업) 군산해역에서 연간 3만톤 이상 고품질 물김이 생산되지만, 마른김 가공공장을 건립하지 못한 지역 어업인의 염원 해결

※ ’92년 새만금사업, 군산시 마른김가공공장 ➠ 43개소 전면 폐쇄

※ 연간 3.5 ~ 4만톤 물김 생산량(전국 10%정도) 타지역으로 유출

❍ (부지확보) 새만금 황금어장 상실에 따른 전북 어업인에 대한 배려와 수산업의 부흥을 위한 중앙부처·지자체간 상생발전 모델

❖ 사업추진을 위한 유관기관 협력(MOU)체결

ㅇ협약체결 : 2019. 3월 (266,000㎡ / 8만평  ㅇ협약기간 : ~2025년

ㅇ협약기관 : 개발청, 전북도, 군산시, 군산대학교, 한국농어촌공사 등

❍ (공모선정) 해수부 시범단지 선정, 수산식품 R&D연구시설・지역 특산물 연계 등 지역 수산물 경쟁력 강화와 고용 창출을 통한 지역경제 활성화에 기여

③ 사업개요	□ 단지개요 ❍ 단 지 명 : 새만금 수산식품수출가공 종합단지 ❍ 위 치 : 새만금산업단지 2공구 내 산 46 1-16 (133,000㎡, 4만평) ❍ 관리권자 : 새만금개발청 / 관기관 : 군산시(수산식품정책과) ❍ 조성계획 - (공공분야) 스마트수산가공종합단지 조성 (33,058㎡, 1만평)➠조성중 - (민간분야) 수산물가공업체 입주(99,942㎡, 3만평)➠분양완료(‘24.7월) ↳ 입주기업 : ㈜풀무원 외 10개 업체(투자 2,422억원, 직접고용 486명) □ 사업개요 ① (공공지원) 새만금 스마트수산가공센터 건립 ❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년) ❍ 부 지 : 새만금산업단지 2공구 산-46번지 ❍ 총사업비 : 433.39억원(국비 268, 도비 35, 시비 130) ② (공공기반) 해수 인·배수 기반총괄 사업 ❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년) ❍ 사업내용 : 취수펌프실, 인·배수관로(약2.5km), 세척수처리시설 등 1식 ❍ 총사업비 : 191억원(도비 36, 시비 88, 특교 6, 추가 61) ③ (공공기반) 수산식품단지 내부도로 및 기반시설 ❍ 사업기간 : 2024 ~ 2026년(3년) ❍ 주요시설 : 도로 및 기반시설*오수, 우수, 가로등 등) ❍ 총사업비 : 4,056백만원 (도비 1,000, 시비 2,190, 발특 866)

④ 사업부서	수산산업과		⑤ 담당자		박동래 수산식품정책과장 김지완·공길후·최성철 주무관
⑥ 선정기준	국정과제(대규모예산)		⑦ 사업기간		2022 ~ 2026
<그간 주요 추진내용>
○ 스마트 수산가공센터 시공업체 선정 및 민간부지 입주계약 완료		’25. 10		박동래 과장 손정성 계장 김지완, 최성철 주무관
○ 스마트 수산가공센터 실시설계 총사업비 협의 완료		’25.09.		박동래 과장 손정성 계장 김지완 주무관
○ 공공기반(내부도로, 해수인배수 등) 공사착공		’24.12.		박동래 과장 손정성 계장 공길후 주무관
○ 수산식품단지 입주심사 및 업체 선정(12개소)		’24.07.		박동래 과장 손정성 계장 최성철 주무관
○ 수산식품지 지정(변경) 및 관리기본계획 수립 고시		’24.04.		박동래 과장 손정성 계장 김지완 주무관
○ 개발청 입주심사 위원회 통과 (공공 1만평)		’23.10.		박동래 과장 손정성 계장 최성철 주무관
○ 스마트수산가공센터 기본계획 수립 및 고시(해수부)		’22.09.		박동래 과장 손정성 계장 김지완 주무관
○ 스마트수산가공센터 공모사업 전라북도(군산시) 선정		’22.03.		박동래 과장 손정성 계장 김지완 주무관
○ 새만금 산업단지 사업부지 확보 및 협약(MOU) 체결		’19.03.20.		이승복 부시장 안창호 국장 이성원 과장 정봉균 계장 손정성 주무관
○ 군산시 수산업 어촌 및 식품산업 2030 발전계획		’18.~’19.		고남철 과장 박동래 계장 정우진 주무관