[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	수도과	②담당자 (전화번호)	행정5급 박진석 시설7급 허준선 (454-5392)
③정책사업명	고군산군도 상수도 시설공사 상수도공기업관리
④선정기준	총사업비 10억이상	⑤사업기간	2013 ~ 2018
⑥주요내용	❍ 사업목적 - 새만금방조제 신시도～야미도 다기능부지 및 고군산군도 용수공급 - 고군산군도 연결도로 개설시기에 맞추어 신시～장자도간 상수도 시설 ❍ 사업개요 - 위 치 : 옥도면 신시도～무녀도～장자도 구간 - 규 모 : 상수도관로(Φ700～200㎜) L=19.7㎞(신시도～장자도) 배수지 1개소(Q=4,000㎥), 가압장 1개소 - 사 업 비 : 18,341백만원 (국비 12,034 시비 6,307) ‧ '16년 사업비 : 1,150백만원 - 사업기간 : ‘11. 6월 ～‘17. 8월 ❍ 추진실적 -‘13. 06. : 오식도~비응항 구간 설치(D700~500, L=4.4km) -‘15. 07. : 신시도~무녀도(임시개통구간) 설치(D500~400, L=4.5km) -‘16. 09. : 무녀도회차지~무녀1구 교차로 구간 설치(D400~300, L=2.0km) -‘17. 04. : 배수지 및 신시도 송배수관로 설치(D500~400, L=1.6km)