대야면사무소 청사 신축

총무과,  홍종철,  063-454-2243

□ 준공전 단계

<일반현황>

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

군산시 대야면 석화로 7

○ 인구 수

5,982명(2014. 7월 기준)

○ 공무원 수

17명 / 13 명

정원/현원

○ 재정자립도

22.4%

사업

개요

○ 기존청사

용도

준공연도

부지면적

기준면적

건물연면적

층수

(지하/지상)

비고

합계

1981

3,837㎡

-

881㎡

0/2

면사무소

1981

3,837㎡

-

881㎡

0/2

○ 청사신축 필요성

읍면동 청사 신축 우선순위(2011년 8월)에 의거 면지역 청사신축 1순위로 현 청사가 33년된 노후 청사로 이용 주민들에게 불편을 초래하고 있으며, 청사가 협소하여 지역주민들이 원하는 주민자치센터

프로그램을 수행할 수 없어 행정서비스 향상 및 지역주민의 삶의 질 제고를 위해 청사 신축이 필요함

○ 사업기간

2014 ∼ 2016(3년)

○ 사업수행방식

입찰 (적격심사 낙찰제)

○ 추정(예정)가격

-

계약금액

-

낙찰율

- %

○ 청사신축 계획(안)

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
합계	-	3,837㎡	-	1,492.58㎡	0/ 3
면사무소	-	3,837㎡	-	1,492.58㎡	0/ 3

소요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
합계	3,450백만원			2,450백만원	1,000백만원
당해연도(H)	100백만원			100백만원
H+1	1,400백만원			400백만원	1,000백만원
H+2	1,950백만원			1,950백만원
H+3 이후

○ 총사업비

1) 토지매입비

-

비고

2) 설계비

100백만원

3) 감리비

45백만원

4) 공사비

3,300백만원

5) 기타부대비

5백만원

향후

계획

및

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

공유재산관리계획

2012. 11

원안가결

지방의회

투융자심사

2012. 07

조건부가결

(행정복합타운방식으로추진)

자체

투융자심사(재심사)

2013. 10

원안가결

자체

사유:지방채발행

중기재정계획

2012

계획 반영

자체

설계

2015. 02

설계완료

자체

착공

2015. 04

공사착공

자체

준공

2016. 03

자체

1. 계약수행 전 단계

① 공종별 공사비

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		2,921,217,474
	원/㎡		1,924,135㎡
	비율		100
건 축	금액		2,199,799,000	기존건물철거, 기계, 부대토목, 조경 포함
	원/㎡		1,473,823원/㎡
	비율		75.3
전 기	금액		306,883,684
	원/㎡		205,606원/㎡
	비율		10.5
통 신	금액		218,878,290
	원/㎡		146,644원/㎡
	비율		7.5
소 방	금액		31,783,000
	원/㎡		21,294원/㎡
	비율		1.1
폐기물	금액		163,873,500	기존건물 철거에 따른 건설·지정폐기물 처리 및 석면농도 등 측정용역포함
	원/㎡		76,768원/㎡
	비율		5.6

② 주요 장비내역

구분	주요 사업설계내용(예시)	비 고
건축	○ 골조 : 철근콘크리트 ○ 외부 : THK24 로이복층유리, THK30 화강석 버너구이, AL 쉬트, 징크판넬 등 ○ 내부 : 바닥, 벽, 천정 등 - 바닥 : THK30 화강석 물갈기, 중보행비닐쉬트, THK22 단풍나무후로링 등 - 벽 : 친환경수성페인트, THK15 흡음판 등 - 천정 : AL천정재, THK9.5 집텍스, 친환경수성페인트 등 ○ 토목 : 토공사, 우수공사, 오수공사, 포장공사, 상수공사 등
설비	○ 장비 : 온수보일러(36,000Kcal),급수가압펌프, 물탱크(15톤), 배기휀, 전기온풍기등 ○ 냉난방기 : 실외기(EHP, GHP), 실내기 ○ 환기설비 : 환기유니트, PVC덕트 ○ 배관 : 옥내․옥외위생배관, 온수배관, 가스배관 등
전기 · 통신	수변전, 전력간선, 전등전열, 케이블트레이, 자동화재탐지, 유도등, 무선통신설비 등 통합배선, TV, 방송설비공사, CCTV설비, 태양광설비 등
특이 사항	대지면적 : 3,837㎡, 건축면적 : 570.29㎡, 연면적 : 1,492.58㎡, 지상3층 건축물최고높이 : 18.35m, 옥외주차장 : 35대