1	임피간이역 관광자원화 사업

【사업개요】

❍ 위    치 : 군산시 임피면 술산리 226-1번지 일원

❍ 사 업 비 : 2,375백만원 (국비 950  시비 1,425)

▷ ‘10년 국 350, 시 400 / ’11년 국 300, 시 300 / ‘12년 국 300, 시 725

❍ 사업기간 : ‘10년 ~ ’13년9【‘13.10월 운영개시】

❍ 사 업 량 : A= 5,400㎡

- 임피역사․부속건물 정비 및 내부전시

- 임피역 주변 공원 및 연못조성

- 각종 편의시설 설치 (주차장, 화장실, 휴게시설 등)

【추진실적】

❍ '10.  3.  2 : 유휴자원 관광 상품개발 사업대상지 선정

❍ '10.  4. 27 : 임피역 소유기관(코레일)과 시설물 사용 협약체결

❍ ‘11.  7.     : 실시설계 및 원가심사 완료

주민의견 수렴 및 전문가 자문, 보고회실시

❍ ‘11.  9. ~  : 공사착공(건축, 조경, 전기, 통신분야)

❍ ‘12.  4.   : 전시, 기계분야 발주 및 착공

❍ ‘12. 5. ~ 9. : 전시분야 개선방안 강구 및 설계변경

❍ ‘12. 12.    :  건축분야 완료

❍ ‘13.   2.  : 전기, 통신분야 완료

❍ ‘13.   4 . : 조경, 기계 분야 완료

❍ ‘13.   6.  : 전시분야 완료 ⇒ 전체완료

❍ ‘13.  10.  : 시설물관리, 관광객 안내 편의를 위한 기간제근로자 배치

【금후계획】

❍ 임피 간이역 시설물 유지관리 철저로 방문객 편익증진

❍ 코레일 협력사업인 철도관광객 유치 근대유산 탐방 프로그램 추진

2	군산오토캠핑장 조성사업

【사업개요】

❍ 위    치 : 군산시 옥산면 남내리 우동제 일원

❍ 사업기간 : 2011년 ~ 2014년(4년)

❍ 총사업비 : 3,300백만원(국 1,000  시 2,300)

❍ 사업내용 : 28,150㎡ (8,530평)

- 오토캠핑Site 24개, 일반야영장 60개, 캐라반Site 5개, 캐빈Site 2개

- 안내소 및 매점, 취사장, 화장실 및 샤워장, 바닥분수 및 물놀이터

【추진실적】

❍ ‘10. 10. 26   : 2011년 국민여가캠핑장 대상지 선정(문체부)

❍ ‘11. 01. 27   : 컨설팅단 구성 및 회의 (부지선정-옥산우동제)

❍ ‘11. 05.∼11. : 실시설계용역 시행

❍ ‘12. 02. 16  : 토목공사(1차분) 착공

❍ ’13. 06. 19   : 토목공사(1차분) 준공(토공 및 상하수도공, 측구공)

❍ ‘13. 07. 01   : 토목공사(2차분) 착공

❍ ‘13. 10. 24   : 전기 및 통신공사 착공

❍ ‘14. 03. 28   : 건축공사 착공

【금후계획】

❍ ‘14.  7월 : 캠핑장 운영·관리계획 수립

❍ ‘14.  8월 : 공사 완료

❍ ‘14.  9월 : 조례 제정 및 임시 개장

3	금강호관광지 조성사업

【사업개요】

❍ 위    치 : 전라북도 군산시 성산면 성덕리 일대

❍ 면    적 : 648,380㎡ (196,419평)

❍ 사업기간 : 1991년 ~ 2022년

❍ 총사업비 : 155,076백만원(국비 14,920 도비 708 시비 29,175 민간 110,273)

❍ 사업시행자 : 군산시장

❍ 관광지 지정일   : 1992. 07. 16. (변경 2003. 7. 28 / 2013. 3. 19)

❍ 조성계획 승인일 : 1992. 11. 24. (변경 2003. 7. 28 / 2013. 3. 19)

❍ 주요 시설계획

- 공공시설 : 주차장, 광장, 화장실, 도로, 조각(기념비), 공원(어린이),

철새조망대, 바이크캠핑장, 자연생태체험단지

- 민간시설 : 관광호텔, 호텔, 관광팬션, 황토흙집, 일반음식점, 상가시설,                  기계유희시설, 황토흙집, 야생화단지 등

【운영중인 시설】

❍ 공공시설 : 주차장 5개소, 광장 6개소, 화장실 3동, 관리사무소 1동,  조각기념비 1개소, 어린이공원 1개소, 체험학습장 1동,  철새조망대 1개소, 원형녹지

❍ 민간시설 : 하구둑관리시설 1개소, 한국농어촌공사 1개소, 관광호텔  1개소, 일반음식점 2동, 상가 2동, 기계유희시설 1개소

【주변 관광자원】

❍ 금강하구둑, 금강공원(축구장,야구장,시비공원), 채만식문학관, 진포대첩비

❍ 금강생태공원, 철새도래지, 나포십자들역, 나포뜰아름마을, 오성산 등

4	새만금해넘이명소화 사업

【사업개요】

❍ 위    치 : 선유도 해수욕장 일원

❍ 사업기간 : 2012년 ~ 2015년 (4년)

❍ 사 업 비 : 4,700백만원(국 2,350  시 2,350)

- 2013년까지 : 3,000백만원(국 2,000  시 1,000)

- 2014년     : 1,700백만원(국 350   시 1,350)

❍ 사업내용 : 공중하강체험시설(타워), 연결교량(탐방교), 해넘이전망대 등

【추진실적】

❍ ‘11. 9월 : 전북도 재정 투융자 심사

❍ ‘12. 8월 : 기본 및 실시설계 용역(착수)

❍ ‘12. 9월~10월 : 주민설명회(1차), 용역중간보고회

❍ ‘13. 1월~ 3월 : 시의회(행정복지위원회)간담회(2회)

❍ ‘13. 4월 : 경관 심의완료

❍ ‘13. 6월 ~ 7월 : 주민설명회(2차) 및 최종보고회

❍ ‘13. 6월 ~ 7월 : 국유림사용 및 해상교통안전진단 면제 협의 완료

❍ ‘13. 8월 : 공유수면 점사용 협의 및 실시설계승인 완료

❍ ‘13. 9월 : 공사원가심사(전북도)완료 용역준공

❍ ‘13.11월 : 공사착공(현 공정율 : 40%)

【금후계획】

❍ ‘13. 11. ∼ ’14. 9월 : 1차분 공사시행(연결교량, 해넘이전망대 등)

❍ ‘14.  9. ∼ ’15. 2월 : 2차분 공사시행(공중하강체험시설) 및 시설물 운영방안수립 및 검토

❍ ‘15. 3월            : 사업완료 및 시설물개방