AgriX 농업경영체시스템 데이터 이관 작업 계획(안)

1		개 요

❍ (목   적) 농업경영체 신청서 데이터를 사전 이관하여 ‘24년도 농업경영체 신청업무 시 발생할 수 있는 서비스 장애·지연을 미연에 방지하여 원활하고 안정적인 서비스 제공

❍ (작업대상) 농림사업정보시스템(AgriX) 내 농업경영체시스템

❍ (작업일시) ‘23.12.27.(수) ~ ‘23.12.31.(일)

2		작업 일정

대상 시스템(업무)	사용자 구분	작업일시	작업영향
농업경영체온라인등록서비스	대국민	‘23.12.27.(수) 12:00 ∼ ‘23.12.31.(일) 24:00	작업기간 내 사용불가 ‘24. 1. 1.부터 정상 이용가능
통합경영체관리시스템	농관원 업무담당자	‘23.12.27.(수) 19:00 ∼ ‘23.12.31.(일) 24:00	등록 기능은 사용불가, 조회·발급 기능은 사용 가능
	대국민		정부24 및 무인민원발급기에서 증명서 확인서 발급 가능

3		일자별 주요 작업내용

연번	작업일자	작업구분	세부 내용
1	‘23.12.27.(수)	결재요청마감	○ (12:00) 결재 신청 마감
2		결재처리	○ (12:00 ∼ 17:00) 결재 중인 데이터 처리(농관원) * 17:00부터 결재 승인 기능 중지
3		서비스 중단	○ (12:00 ∼ ) 농업경영체온라인등록 서비스 중단 ○ (19:00 ∼ ) 통합경영체관리 서비스 중단
4	‘23.12.27.(수) 19:00 ∼ ‘23.12.29.(금)	결재 완료 데이터 이관	○ DB 전체 백업 등 이관 작업 진행 - 접수완료데이터, 온라인 신규 및 변경 신청데이터 이관 진행
5	‘23.12.30.(토) ∼ ‘23.12.31.(일)	점검 및 테스트	○ 이관 데이터 전체 검증(점검) 및 테스트 등
6	‘24. 1. 1.(월)	서비스 재개	○ 온라인 및 내부 업무시스템 등 전체 시스템 오픈

* 작업 기간 내 증명서·확인서 발급 가능(정부24 및 무인민원발급기)

** 작업 기간 내 농관원 업무담당자가 ‘조회·발급’ 기능 사용 가능

4		협조 사항

❍ (공   통) 작업기간 내 경영체 온라인 등록 서비스 이용 불가 안내

❍ (농관원) 기관 내 시스템 작업일정 공지, 결재 진행 건 마감 처리, 데이터 모의이관(1, 2차) 협조 등

❍ (지자체) 소관 읍·면·동에 작업내용 전파 및 안내 공지

≪ 작업 안내 공지 문구(참고) ≫

□ 공지제목: 농업경영체 온라인 등록서비스 중단 알림

□ 공지내용:

2023년도 농업경영체시스템 데이터 이관 작업에 따라 농업경영체 온라인 등록서비스가 아래 기간동안 중단됨을 알려드립니다.

중단기간동안 농업경영체 온라인 등록이 불가하니 이용에 불편이 없도록 참고하시기 바랍니다.

○ 서비스 중단 기간: ‘23.12.27.(수) 12:00 ∼ ‘23.12.31.(일) 24:00

* 작업기간 내 ‘정부24 및 무인민원발급기’를 통한 증명서 및 확인서 발급가능

** 작업기간 내 국립농산물품질관리원 업무담당자를 통한 농업경영체 조회, 증명서 및 확인서 발급 가능

○ 서비스 재개 일자: ‘24. 1. 1.(월)부터 정상이용 가능

❍ (산림청) 작업기간 내 경영체 신규·변경 데이터 등록 금지

❍ (그외 연계기관) 연계방식이 기존 경영체 정보에서 변경된 정보 중심으로 송수신 설계가 되어 있는 경우 작업기간 동안 데이터 변경이 없어 전송되는 데이터가 없음을 참고

참고		‘23년 농업경영체 데이터 이관 세부계획(안)

연번	작업구분	작업일시	작업소관	세부 내용	비고
1	모의 이관 (1차)	’23.12.4.(월) 19:00	농정원, AgriX운영센터	·결재 및 배부완료 건 모의 이관(김천, 경기)
		’23.12.5.(화) ∼12.6.(수)	농관원 (본원, 김천,경기)	·’24년 변경신청서 생성여부 확인 등 테스트 및 오류 확인
		’23.12.6.(수) ∼12.15.(금)	농정원, AgriX운영센터	·작업결과 모니터링 및 보완
2	서비스 중단 알림	’23.12.11.(월)	농정원, AgriX운영센터	·[팝업공지] 통합관리시스템 및 온라인서비스 중단 알림 팝업 게재	AgriX
3	모의 이관 (2차)	’23.12.18.(월) 19:00	농정원, AgriX운영센터	·결재 및 배부완료 건 모의 이관(전남, 제주)
		’23.12.19.(화) ∼12.20.(수)	농관원 (본원, 전남,제주)	·’24년 변경신청서 생성여부 확인 등 테스트 및 오류 확인
		’23.12.20.(수) ∼12.22.(금)	농정원, AgriX운영센터	·작업결과 모니터링 및 보완
4	사전점검 및 이관준비	’23.12.18.(월) ∼12.27.(수)	농관원 (본원)	·미결사항 실시간 모니터링 및 결재 독려 * 변경신청 건의 진행상태가 ‘접수완료’ 또는 ‘확인완료’로 반드시 정리
5	단계별 서비스 중단	’23.12.27.(수)	농관원, 농정원	[결재요청] ·(12:00) 온라인서비스 중단 ·(12:00) 통합관리시스템 결재요청 기능 중지 (결재신청 마감/결재 등록 생성 방지)	농업경영체온라인등록서비스
6			농관원, 농정원	[결재승인] ·(17:00) 결재승인 기능 중지 * 결재 중인 등록 건 완결 조치
7			농정원	[등록] ·(19:00) 경영체 신규·변경 등록 기능 중지 → 데이터 신규 등록, 변경 전면 중단	통합경영체관리시스템
8	이관	’23.12.27.(수) ∼12.29.(금)	농관원, 농정원, AgriX운영센터	·전체 경영체DB 백업 및 이관 작업
9	점검 및 테스트	’23.12.30.(토)∼12.31.(일)	농식품부, 농관원, 농정원, AgriX운영센터	·이관 완료 점검·최종 테스트
10	정상운영개시	’24.1.1.(월)	농정원, AgriX운영센터	·서비스 정상 운영