중앙분구 하수관거 정비사업

(2017년 신규 국고보조사업 대상지 선정 - ‘16. 12. 23.)

		위 치 도

군산초교

금광초교

전북은행

영동상가

주차장

창성주공

영광여고

명산시장

군여고

동산중

근대역사박물관

현대오솔

동사무소

면사무소

월명터널

		사업 개요

❍ 처 리 구 역 : 중앙처리분구(해신동, 영화동, 월명동, 창성동, 명산동 일원)

❍ 처리구역면적 : 1.07㎢  /  하수계획인구 : 11,537명

❍ 사 업 개 요 : 분류식 (D200~D300mm : L=20,875m) / 배수설비 1,750가구

❍ 총 사 업 비 : 28,887백만원 (국비 19,348,  시비 9,539)

❍ 사 업 기 간 : 2017년 ~ 2021년 (5년)

❍ 시   공   사 : 우석종합건설(주)(경북 경주시), ㈜삼화건설사(전북 전주시)

❍ 감   리   사 : ㈜동성엔지니어링, ㈜범한엔지니어링, ㈜인우

		그간 추진사항

❍‘16.  5. 23. : 실시설계용역 착수

❍‘17. 05. 31. ~ 9. 18. : 설계경제성(VE) 검토

❍‘17. 09. 05. : 주민설명회 실시 (월명동사무소)

❍‘17. 09. 20. : 기술자문위원회 개최

❍‘17. 12. 21. ~‘18. 07. 23. : 재원협의(새만금지방환경청)

❍‘18. 08. 10. : 총사업비 변경승인 (승인기관: 새만금지방환경청)

❍‘18. 09. 17. : 공공하수도 설치인가 고시(군산시 고시 제2018-120호)

❍‘18. 09. 21. : 공사 및 건설사업관리용역 발주 (조달청 계약의뢰)

❍‘18. 12. 17. : 공사 착공

❍‘18. 12. 21. : 건설사업관리용역 착수

❍‘19.  3.  4. : 동절기 공사중지 해제 및 재착공

		연차별 투자계획

구 분		계	2017	2018	2019	2020	2021
계		28,887	100	4,040	3,232	10,600	10,915
국비지원	소계	27,640	100	4,040	3,232	10,000	10,268
	국비(70%)	19,348	-	2,828	2,262	7,000	7,258
	시비(30%)	8,292	100	1,212	970	3,000	3,010
지원제외	시비(100%)	1,247	-	-	-	600	647

		금후 계획

❍‘19. 4월    : 공사 실착공 (동산중학교 일원부터 단계적으로 시행)

❍‘21. 11. 30. : 공사 준공