3-6		산업 지식산업센터 설립

부서명	산업혁신과	과장	황관선	계장	이길란	담당자 (전화번호)	고무성 (454-2733)

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비예산
	◯			◯	◯		◯		35,033

추진사항	사업기간	시민소통방법
	2023~2026	□ 설명회·공청회 □ 전문가 자문 □ 만족도 조사 ■ 언론·보도·기타

□ 추진목표

❍ 미래형 친환경자동차산업, 데이터산업, 신재생에너지산업 등 관련기업 유치 및 스타트업 육성으로 청년들의 적극적인 창업과 취업 촉진

❍ 신성장 산업 중심 4차산업 육성을 통한 지역경제 활성화와 기업의 업종별 집단화를 통해 집적효과 제고

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 미정 [전북산학융합원, 국가산단 유휴지 등]

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026 (5년)

❍ 사 업 비 : 35,033백만원 [국 16,000, 시 19,033 (부지매입 4,000)]

❍ 사업내용 : 중소기업벤처기업부가 지원하는 「공공임대형 지식산업센터」건립으로 지역 전략산업 육성을 통한 지역경제 활성화

□ 추진 로드맵

[추진방향]

❍ 제조업, 지식산업, 신산업 및 연구소 등 지역 전략산업 육성을 위한 지역 주도 「공공임대형 지식산업센터」 건립

[추진프로세스]

1단계 (’23)		2단계 (‘24)				3단계 (‘24.하반기)			4단계 (‘25~’26)
건립부지 확보 및 타당성조사 용역 실시		건립지역 확정, 차년도 예산 (설계비 등) 우선 반영				분석결과를 토대로 기재부가 사업규모·기간, 총사업비 결정			센터 건립 추진 (설계 → 착공 →공사 → 준공)
지자체			국회				기재부, 중기부		지자체

□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

❍ 신규 공모사업 공모를 통한 예산확보

- 4차산업 지식산업센터 설립 (국 160, 시 190)

※ 국비지원 : 건립비 70% 이내 (최대 160억)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	35,033	-	35,033	-	33	4,000	10,500	20,500	-
국비	16,000	-	16,000	-	-	-	4,500	11,500	-
시비	19,033	-	19,033	-	33	4,000	6,000	9,000	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별		목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진				(누적)
임기내	2022	◦ 사업 추진 사전 준비	- 용역비 확보 (사전 용역심의) - 건립부지 확보 방안 모색	10
	2023	◦ 타당성 조사	- 건립부지 선정(확보) 및 타당성조사 용역실시	20
	2024	◦ 건립지역 결정	- 수요조사서 및 건립계획서 중기부 제출 - 건립지역 확정 및 차년도 국비 예산(설계비) 반영	40
	2025	◦ 설계 및 공사	- 지식산업센터 설계 실시 - 건립 추진 (착공 및 공사 진행)	80
	2026	◦ 시설운영	- 준공 - 지식산업센터 위탁 운영	100
임기후		◦ 시설운영 및 관리	- 위탁운영 및 관리감독